Пояснювальна записка
до рішення міської ради
«Про внесення змін до 
«Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту
на 2016 - 2020 роки»

    В продовж літа, 2016 року на Луцькому підприємстві електротранспорту в рамках Програми розвитку було проведено роботи з ремонту покрівель виробничих приміщень. Дані роботи провело Управління капітального будівництва Луцької міської ради. Кошторис даних робіт склав 1700,0 тис. гривень, що утворило різницю на  200 тис. гривень більше від суми закладеної в «Програмі розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки»,  а саме: в частині напрямки діяльності, «Капітальний ремонт та реконструкція будівель», в заході «Капітальний ремонт покрівлі над виробничими приміщеннями». Отже необхідність внесення змін викликана тим, що в Програмі розвиту коштів з бюджету міста було закладено на суму – 1500,0 тис. грн., а використано на вищезазначені заходи 1700,0 тис. грн., на 200,0 тис. гривень більше. Така різниця виникла через збільшення обсягів робіт.

Директор Луцького підприємства електротранспорту                  Грицюк І.В.